109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 의령군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
계	67,066	40,091	9,086	18,310
도로와 지하시설물 전산화사업	2,016	0	25	1,991	2020	2017	3.6
의령 화정복합문화센터 건립사업	2,350	287	463	1,600	2018	2015	40
의병문화체육관 건립	6,700	421	380	6,320	2020	2017	5
의령문화원사 건립	2,600	253	244	2,103	2019	2017	5
동부지역수영장 건립	3,900	0	30	3,870	2020	2017	10
의령 동동지구 택지개발사업	49,500	39,130	7,944	2,426	2018	2014	100

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도로와 지하시설물 전산화사업

담당자

민원봉사과

장영순(☎570-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로와 지하시설물(상·하수도) DB구축하여 각종 안전사고 예방

○ 체계적이고 효율적인 관리로 공간정보업무 활용 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 의령읍 일대

○ 규 모 : L=249.51km(도로 : 67.05km, 상수도 : 65.96km, 하수도 : 116.50km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,016	0	25	100	1,891
국 비	1,194	0	0	60	1,134
시 도 비	238	0	0	12	226
시군구비	584	0	25	28	531
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.6%)

○ 2017. 4. : 공간정보기본계획 수립 완료

○ 2018. 6. : ‘18년 사업 용역 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2018.  7.     : 도시기준점 선점 및 측량

○ 2018.  8. ~ 9. : 도로와 상·하수도 조사/탐사

○ 2018.  10.     : 정위치/구조화편집 및 현장 보완측량

○ 2018.  11.     : 공공측량 성과심사 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

의령 화정복합문화센터 건립사업

담당자

의병문화관광과

이명식(☎570-2433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화혜택 기회가 부족한 농촌지역의 문화생활 향유 기회제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

○ 위 치 : 의령군 화정면 상정리 737-1번지 일원

○ 규 모 : 복합문화센터 1동(연면적 797.8m2, 지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,350	287	463	1,600	0
국 비	1,000	0	200	800	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,350	287	263	800	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

❍ 2015. 02월 : 복합문화센터 건립계획 수립

❍ 2015. 06월 : 공유재산관리계획 수립

❍ 2015. 07월 : 타당성조사 및 기본계획용역

❍ 2015. 11월 : 경남도 지방재정 투자심사(조건부)

❍ 2017. 10월 : 군관리계획 결정

❍ 2017. 12월 : 실시계획인가 고시 및 사업시행

❍ 2018. 01월∼02월 : 동절기 시공중지

❍ 2018. 03월 : 공사추진 중(공정율: 40)

□ 향후계획

○ 2018. 09월 : 사업준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

의병문화체육관 건립

담당자

의병문화관광과

김판석(☎570-2432)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 우리군 관내 실내체육관 부재로 우천 시 체육행사 진행 불편

❍ 군민의 건강증진과 각종 체육대회 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ∼ 2020년(3년간)

○ 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 529번지 일원

○ 규 모 : 실내체육관 1동(연면적 3,818㎡, 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,700	665	399	2,500	3,136
국 비	2,500	0	0	2,500	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,200	665	399		3,136
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

❍ 2009. 08월 : 군계획시설(체육시설) 결정

❍ 2011. 07월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2012. 12월 : 공유재산관리계획 수립

❍ 2017. 02월 : 지방재정 투자심사 조건부 통과 - 67억

❍ 2017. 07월 : 기본 및 실시설계 착수(금성종합건축사사무소)

❍ 2018. 현재 : BF예비인증 취득, 농지전용, 농업진흥지역 해제

□ 향후계획

❍ 2018. 08월 : 군계획시설 실시계획 인가

❍ 2018. 09월 : 건축협의 완료

❍ 2018. 10월 : 경상남도 계약심사

❍ 2018. 11월 : 사업발주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

의령 문화원사 건립

담당자

의병문화관광과

강정은(☎570-2403)

□ 사업목적 및 필요성

o 문화원사 건립으로 문화발전 기반조성 및 군민 문화욕구 충족

o 군민의 문화예술 참여기회 확대를 통한 문화가 있는 삶 실현

□ 사업개요

o 사업기간 : 2014. 1 ~ 2019. 12 (6년간)

o 위     치 : 경상남도 의령군 의령읍 서동리 766번지 일원

o 사업규모 : 지하1층,지상2층(부지면적 5,593㎡,건축연면적 1,035㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600	254	243	543	1,560
국 비	549	0	0	0	549
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,051	254	243	543	1,011
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

o 의령문화원사 건립계획 수립              : 2013. 11월

o 공유재산 관리계획 수립                  : 2014. 10월

o 기본계획 및 타당성조사 용역             : 2016. 08월

o 부지매입 완료                           : 2017. 03월

o 경남도 지방재정투자 심사                : 2017. 07월

o 군 관리계획 결정                        : 2018. 02월

o 지방문화원 시설비 사전평가 완료(문체부)  : 2018. 04월

o 실시설계 용역 실시                      : 2018. 07월

□ 향후계획

o 착   공                                 : 2019. 03월

o 준   공                                 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

o 해당없음

사업명

동부지역 수영장 건립

담당자

의병문화관광과

이명식(☎570-2433)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 동부지역 생활체육인 증가로 지속적인 수영장 설치요구 증대

❍ 군민건강증진과 생활체육활성화 및 체육시설확충 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ∼ 2020년(4년간)

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 850번지 일원

○ 규 모 : 수영장 1동(연면적 813㎡, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,900	0	30	1,406	2,464
국 비	1,000	0	0	0	1,000
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,900	0	30	1,406	1,464
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

❍ 2017. 01월 : 동부지역 체육센터 건립 추진계획 수립

❍ 2017. 06월∼11월 : 기본계획 및 타당성조사 용역

❍ 2017. 08월 : 군의회 사전설명, 공유재산 관리계획 수립

❍ 2017. 09월 : 지방재정 투자심사(자체)

❍ 2018. 01월 : 토지보상협의(87%)

❍ 2018. 04월 : 군관리계획결정 및 사전재해영향성검토용역 실시

□ 향후계획

❍ 2018. 09월 : 군관리계획결정 및 지형도면 고시

❍ 2018. 10월 : 실시설계용역 실시

❍ 2019. 05월 : 실시계획인가 승인신청 및 고시

❍ 2020. 12월 : 사업준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

의령 동동지구 택지개발사업

담당자

도시개발사업과

김철하(☎570-2922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지속적인 인구 감소에 따른 군세 약화방지를 위한 지역개발 기반구축으로 계획적 신도시 개발

○ 지역주민들에게 쾌적한 주거환경 제공과 인근 대도시의 배후도시로의 기능 및 주변지역의 산업단지조성 등에 대한 주거공간지역으로의 역할

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ~ 2018년

○ 위 치 : 의령군 의령읍 동동리, 무전리 일원

○ 규 모 : 택지개발 A=257,710.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 금49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	49,500	39,130	7,944	720	1,706
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	10,000	10,000	0	0	0
시군구비	39,500	29,130	7,944	720	1,706
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1993.  7. : 택지개발예정지구 지정 승인

○ 1995.  3. : 택지개발예정지구 지정 변경 및 개발계획 승인

○ 2013. 10. : 지구지정(2차), 개발계획 변경, 실시계획 승인

○ 2015.  6. : 택지개발사업 시설공사 착공

○ 2017. 10. : 택지개발사업 시설공사 준공

○ 2017. 12. : 지구지정(5차), 개발계획(5차) 실시계획(4차) 변경승인

○ 2018.  2. : 의령 동동지구 택지개발사업(1단계) 준공 승인

□ 향후계획

○ 2018. 7. : 의령 동동지구 택지개발사업(2,3단계) 타당성조사용역 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 의령군에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해	당	없	음

10-3. 민간투자사업

우리 의령군에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	의령군립노인 전문병원 임대형민자사업	백년건강 지킴이(주)	3,960	3,504	599	11,659	2011. ~ 2031. (20년)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업

담당자

보건소

김성원(☎570-4035)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초고령화 사회진입에 따른 노인성질환인 치매, 중풍 등의 치료 및 재활

○ 노인성질환자 및 가족의 사회‧경제적 부담 경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 4. 9. ~ 2011. 6. 29.

○ 위    치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655

○ 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)

○ 총사업비 : 3,960백만원

○ 사업규모 : 1동 2층(건축면적 : 1,531.22㎡/연면적 : 2,879.62㎡)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 관리운영기간 : 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액   (단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,762	3,504	599	680	10,979
국 비	4,776	1,056	169	200	3,351
시 도 비	2,338	478	84	100	1,676
시군구비	8,648	1,970	346	380	5,952
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진단계(운영 중)

○ 2011. 10. 1. ~ 현재

□ 향후계획

○ 의령군립 노인전문병원 시설임대료 및 운영비 적기

□ 사업변경 내역

○ 병상 수 증가 : (당초) 26실 128병상 ⇒ (변경) 26실 140병상