특수공시대상사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비	사업부서	비고
1	동동 공영 주차장 조성 사업	공영주차장 설치 1식	625	경제교통과
2	동동도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	도시계획도로 개설 L=165m, B=8.0m	2,000	건설도시과
3	덕천지구 재해위험저수지 정비사업	제당숭상 L=75m, H=2.7m, 여방수로 L=58m emd	2,423	건설도시과
4	의령천 고향의 강 조성사업	하천정비 L=6.7km	14,522	안전 관리과
5	동부권 지방상수도 설치사업	배수지 4개소, 가압장9개소, 송배수관로79.8km 1단계사업(지정면,낙서면), 2단계사업(정곡면,궁류면,유곡면)	29,857	상하수도 사업소

동동 공영 주차장 조성 사업

○ 삼영타운 인근 지역의 주차수요가 지속적으로 증가하여 주차공간이 부족한 실정

○ 주차공간을 확보하여 불법 주정차 감소, 교통소통 원활 및 주차난 해소를 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.(1년)

❍ 위    치 : 의령군 의령읍 동동리 862-14번지

❍ 사업규모 : 공영주차장 설치 1식

❍ 총사업비 : 625백만원(국비 180백만원, 군비 445백만원)

추진경과

❍ 16년  8월 : 관계기관(의령경찰서) 협의 및 주민설명회

❍ 16년  9월 : 공영주차장 조성 계획 수립

❍ 16년 10월 : 국유재산 매수 신청(한국자산관리공사)

❍ 17년  8월 : 기본 및 실시설계

❍ 17년  8월 : 부지 및 지장물 보상

❍ 17년 10월 : 사업 시행

❍ 17년 12월 : 사업완료 및 정산 완료

향후계획

❍ 해당없음

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년 이후
계	625	-	625	-	-	-
군 비	625	-	625	-	-	-

담당자 : 경제교통과 교통담당 주우석(☎055-570-2833)

위치도

전경사진

동동도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업

❍ 도시계획도로 장기간 미개설로 인한 사유재산 침해 및 교통불편 초래

❍ 도로개설을 통한 긴급차량 접근로 확보로 주민의 생명과 재산보호

사업개요

❍ 사업기간 : 2016 ~ 2018년(3년간)

❍ 위    치 : 의령군 의령읍 동동리, 중동리 지내

❍ 사업규모 : 도시계획도로 개설 L=165m, B=8.0m

❍ 총사업비 : 2,000백만원(국비 500백만원 , 지방비 1,500백만원)

추진상황

❍ 1977.  8. : 군계획시설 최초 결정

❍ 2015. 10. : 조사 측량 및 실시설계

❍ 2016. 12. : 실시계획인가 고시

❍ 2017.  2. : 보상계획 공고 및 편입토지 보상협의 실시

❍ 2017.  4. : 지장물(가옥) 철거 공사 시행

❍ 2017.  9. : 도로공사 시행

향후계획

❍ 2018.  9. : 미협의 토지 수용재결 추진

❍ 2018. 12. : 사업완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000	-	500	1,500	-	-
국 비	500	-	500	-	-	-
도 비	250	-	-	250	-	-
군 비	1,250	-	-	1,250	-	-

담당자 : 건설도시과 도시계획담당 김동욱(☎055-570-2732)

위치도

전경사진

덕천지구 재해위험저수지 정비사업

❍ 재해위험 저수지에 대한 완벽한 정비를 통해 재해 위험을 사전에해소하여 주민의 생명과 재산보호에 기여

사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 03. 07. ~ 2019. 06. 30.

❍ 위    치 : 의령군 유곡면 덕천리 일원

❍ 사업규모 : 제당숭상 L=75m, H=2.7m, 여방수로 L=58m emd

❍ 총사업비 : 2,423백만원(국비 1,212백만원 , 지방비1,211백만원)

추진상황

❍ 2013.  9. 13. : 재해위험저수지 지정․고시

❍ 2017. 12. 21. : 1차분(2017년도분) 준공

❍ 2018.  7. 19. : 2차분(2018년도분) 준공

향후계획

❍ 2019.  1. 15. : 3차분(2019년도분) 착공

❍ 2019.  6. 30. : 사업완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,423	0	100	600	960	763
국 비	1,212		50	300	480	382
도 비	363		15	90	144	114
군 비	848		35	210	336	267

담당자 : 건설도시과 농업기반담당 권치국(☎055-570-2722)

위치도

여수토및비상배수문설치 1식

복통,사통 재설치1식

제체보강 및 제당숭상(H=2.7m) L=75m

전경사진

의령천 고향의 강 조성사업

❍ 의령천을 종합정비하여 깨끗하고 아름다운 하천 조성

❍ 홍수에 안정적인 하천으로 재해로부터 군민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 의령군 의령읍 정암리 ~ 가례면 가례리

❍ 사업규모 : 하천정비 L=6.7km

❍ 총사업비 : 14,522백만원(국비 8,713백만원 , 지방비 5,809백만원)

추진상황

❍ 2013. 6월 : 실시설계용역 착수

❍ 2014.12월 : 하천정비기본계획(변경) 고시

❍ 2015.12월 : 사업 착수

❍ 2018. 2월 : 공사(1차,2차) 준공(보도교, 동동1제,3제 완료)

❍ 2018. 6월 : 가동보 2개소 설치 완료(현 공정율 85)

향후계획

❍ 2018. 9월 : 동동제 홍수방어벽 설치 완료(90)

❍ 2018.12월 : 사업 준공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,522	4,671	5,833	4,018		-
국 비	8,713	2,622	3,500	2,591		-
도 비	1,742	524	700	518		-
군 비	4,067	1,525	1,633	909		-

담당자 : 안전관리과 하천담당 이승봉(☎055-570-2772)

위치도

전경사진

동부권 지방상수도 설치사업

❍ 의령 동부권 5개면 지역에 안정된 수질, 수량의 강변여과수 공급

❍ 기존 마을단위 급수지역을 지방상수도로 전환하여 주민삶의 질 향상

사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2020. 12.

❍ 위    치 : 의령군 정곡면, 지정면, 낙서면, 궁류면, 유곡면

❍ 사업규모 : 배수지 4개소, 가압장9개소, 송배수관로79.8km

1단계사업(지정면,낙서면), 2단계사업(정곡면,궁류면,유곡면)

❍ 총사업비 : 29,857백만원(국비 70, 군비 30)

추진상황

❍ ‘13. 3월 ~ ’13. 12월 : 현장조사 및 기본설계완료

❍ ‘14. 4월 ~ ’14. 8월 : 설계VE용역, 지방건설기술심의완료

❍ ‘14. 9월 ~ ’15. 3월 : 조달청원가검토 및 공사계약심의완료

❍ ‘15. 4월 ~‘16.12 : 1단계1차분,1단계2차분 준공

- 송수관로(D200)L=9.5km, 배수관로(D75~200)L=15.6km

❍ ‘17. 1월 ~‘18. 2월 : 1단계3차분 준공

- 배수관로(D80~150)L=7.8km, 급수관로(D16~D75) L=30km

❍ ‘17. 6월 : 총사업비 변경 승인(12,726백만원 증액)

❍ ‘18. 3월 : 1단계 4차분 시행(준공예정 2019. 4월)

- 배수관로(D80~150)L=23km

향후계획

❍ 2018. 10월 : 시험가동 및 상수도공급개시(1단계사업: 지정, 낙서)

❍ 2018. 12월 : 2단계사업 착수

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년 이후
계	29,857	7,401	4,858	4,872
국 비	20,900	5,030	3,400	2,000	2,400	8,070
도 비
군 비	8,957	2,371	1,458	2,993	1,029	1,106

담당자 : 상하수도사업소 상수도담당 하도수(☎055-570-2582)

위치도

계획도