9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 의령에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
30건	232,563	81,133	48,057	103,373
청사별관신축	5,300	234	172	4,894	2016	2014	70
의령 화정복합문화센터건립사업	2,400	0	800	1,600	2017	2015	10
곽재우생가 주변 정비사업	2,300	2,045	255	0	2015	2011	90
거장산 가족휴양시설 조성사업	3,904	0	66	3,838	2017	2013	2
의병문화체육관 건립사업	22,000	1,400	216	20,384	2017	2011	10
대의 생활체육공원 조성사업	3,000	2,740	83	177	2016	2009	95
칠곡 공설운동장 조성사업	2,100	1,240	0	860	2017	2011	59
곤충생태학습관 건립	5,512	416	1,231	3,865	2015	2011	100
대의모의지구 지방상수도 확장 공사	4,100	100	200	3,800	2020	2013	10
부림하수관거 정비사업	4,409	714	2,201	1,494	2017	2014	75
동부권지방상수도설치사업	17,131	1,829	2,000	13,302	2018	2011	30
강변여과수 개발사업	25,000	9,713	5,600	9,687	2017	2009	75
대의면농어촌생활용수개발사업	5,000	3,691	1,309	0	2016	2008	95
궁류마을하수도 설치공사	6,750	4,138	2,612	0	2015	2013	100

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
한우산 생태숲 조성사업	5,000	2,200	2,000	800	2016	2007	90
자굴산권역 산림생태문화체험단지조성사업	30,000	4,100	4,000	21,900	2018	2011	25
부림도시계획도로 (중로2-54호선) 개설사업	1,000	0	1,000	0	2016	2014	60
부림도시계획도로 (부림약국~하나로마트)개설사업	2,380	34	1,374	972	2016	2011	50
동동도시계획도로 (혜성사우나~세월정) 개설사업	2,600	2,410	190	0	2015	2012	100
신반지구 상습침수도로 개선사업	2,600	0	2,000	600	2017	2015	30
와요~운곡간 도로 확포장공사	3,000	0	700	2,300	2018	2015	40
다안1지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	7,600	4,600	3,000	0	2015	2011	100
괴진2지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	4,000	400	3,600	0	2015	2013	100
경산소하천 정비사업	2,451	1,945	506	0	2016	2012	95
방계소하천 정비사업	3,650	2,390	1,260	0	2016	2012	95
적곡들 소하천 정비사업	3,012	1,994	1,018	0	2015	2012	100
보천소하천 정비사업	2,174	700	1,140	334	2016	2014	80
내곡소하천 정비사업	2,186	0	200	1,986	2017	2014	30
의령 동동지구 택지개발사업	49,500	32,100	6,820	10,580	2018	2014	40
시설원예 에너지이용효율화사업	2,504	0	2,504	0	2015	2014	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

청사(별관) 신축 공사

담당자

재무과 지경섭(☎570-2364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 별관 노후화 및 청사 후면 재해 정비에 따른 사무 공간 확충

○ CCTV 관제센터와 재난상황 관제시스템 통합 운영 장소 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 의령읍 동동리 1385-1번지 등 7필지

○ 규 모 : 4층(지하1, 지상4, 연면적 2,350㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,300	234	172	4,894	0
국 비
시 도 비
시군구비	5,300	234	172	4,894	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2013년 하반기 : 청사신축 추진계획 및 공유재산 관리계획 수립

○ 2014년 상반기 : 실시설계 용역 및 지방재정 투융자심사 실시

○ 2014년 하반기 : 군 관리계획시설(도로, 공공청사) 결정(변경) 완료

○ 2015년 상반기 : 실시설계 용역 보고회(1차, 2차) 개최

○ 2015년 하반기 : 실시설계 용역 완료 및 사업시행

○ 2016년 상반기 : 지장물 철거, 터파기, 철근콘크리트공정 진행

□ 향후계획

○ 2016. 10 : 외부마감

○ 2016. 12 : 준공

사업명

의령 화정복합문화센터 건립사업

담당자

의병문화관광과

윤명한(☎570-2403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들에 대한 삶의 질을 향상시키고 지역사회 문화예술 향유 기회       증대와 지역의 주차문제 해소 및 편익시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 화정면 상정리 737-1 등 6필지

○ 규 모 : 복합문화센터 1개소(지상2층, 부지 : 6,695㎡, 건축 : 1,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,400		20	2,380
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	1,400		20	1,380
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 중기지방재정계획 반영

○ 공유재산취득 계획 승인

○ 지특회계 인센티브사업 확정(국비 2억원 확보)

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립

□ 향후계획

○ 잔여지 부지매입

○ 군관리계획(문화시설) 결정

○ 실시설계 용역

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

곽재우생가 주변 정비사업

담당자

의병문화관광과

구상서(☎570-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의병장 곽재우장군 생가주변을 정비하여 의병체험을 통한 호국의병 정        신 계승과 관광객을 위한 체험시설, 편의시설 등을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2015

○ 위 치 : 의령군 유곡면 세간리 806-1번지 일원

○ 규 모 : 19,470㎡(체험장, 잔디광장, 주차장, 화장실 등 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,300	2,045	255
국 비	800	1,023	128
시 도 비	240	307	38
시군구비	1,260	715	89
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2010. 12 : 기본계획 수립

○ 2011. 10 : 지방재정 투자 심사 완료

○ 2013. 01 : 군계획시설(문화공원) 결정 및 실시계획 인가

○ 2013. 02 : 사업 착공

○ 2015. 12 : 사업 준공

□ 향후계획

○ 2016. 12 : 실시계획 변경인가 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거장산 가족휴양시설 조성사업

담당자

의병문화관광과

김판석(☎570-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증가하는 벽계관광지 방문객 수요에 대응하고, 가족단위 캠핑객이 체류할

수 있는 휴양지를 개발함으로써 지역관광 활성화 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 궁류면 압곡리 348-2번지

○ 규 모 : 29,823(폐교 리모델링, 오토캠핑장, 프리텐트장, 운동시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,904백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,904		66	2,672	1,166
국 비	1,369		66	1,303
시 도 비	411			411
시군구비	2,124			958	1,166
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 사업부지 매입 완료

○ 폐교 구조물 안전진단

○ 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 사업 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

의병문화체육관 건립사업

담당자

의병문화관광과  김판석☎570-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 관내 실내체육관이 전무하여 우천이나 악천후 시 군민들의 생활체육       활동 및 건전한 여가선용 이바지코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 530번지 일원

○ 규 모 : 실내체육관 A=15,000㎡, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	22,000	1,400	216	160	20,224
국 비	10,000				10,000
시 도 비	4,500				4,500
시군구비	7,500	1,400	216	160	5,724
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 편입토지 부지보상 협의 중(총 6필지 중 3필지 보상완료, 3필지 협의 중)

□ 향후계획

○ 행정절차이행, 실시설계 및 실시계획인가

○ 사업발주

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대의 생활체육공원 조성사업

담당자

의병문화관광과  구상서☎570-2433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 대의면 관내 공설운동장 및 생활체육공원을 조성하여 면민과

이용객들의 체육활동 활성화에 이바지코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2016

○ 위 치 : 의령군 대의면 마쌍리 일원

○ 규 모 : 생활체육공원조성 A=42,167㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	2,740	83	177
국 비	768	768
시 도 비
시군구비	2,232	1,972	83	177
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95 %)

○ 3차분(조경 및 공원조성) 사업완료(‘14. 6월)

○ 4차분(운동장 진입도로 정비 등) 사업완료(‘15. 5월)

□ 향후계획

○ 진입도로 확포장 및 부대시설 공사 완료(‘16. 6월)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

칠곡 공설운동장 조성사업

담당자

의병문화관광과 김판석☎570-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 칠곡면 관내 공설운동장이 없어 면민들의 숙원사업을 해소하고

주민들의 생활체육 활동 및 건전한 여가선용 이바지코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2017

○ 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 457-1번지 일원

○ 규 모 : 공설운동장 A=15,360㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,100	1,240	-	100	760
국 비	360		-		360
시 도 비	100	100	-
시군구비	1,640	1,140	-	100	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  59 %)

○ 편입토지 부지보상 협의 중(미협의 : 4필지)

○ 기 매입부지 부지조성 완료

□ 향후계획

○ 실시설계 및 실시계획인가

○ 2016. 10. 칠곡 공설운동장 주변정비 사업발주

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 당초 1,700백만원,  변경   2,100백만원

사업명

곤충생태학습관 건립

담당자

환경수도과 김현옥(☎570-2552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 곤충의 관찰 및 생태를 체험할 수 있는 생태학습관 건립으로 친환경 교육

의 장 마련하여 주변 관광지와의 연계를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012.6~ 2015.12

○ 위 치 : 의령군 의령읍 무전리(전통농경문화테마파크 내)

○ 규 모

- 곤충생태학습관 건축 : 1,800㎡(전시관 1,140㎡, 유리온실 660㎡)

- 신재생에너지 설비 설치 : 360Kw(지열 350Kw, 태양광 10Kw)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,512백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,512	416	1,231	3,865
국 비	2,747	208	616	1,923
시 도 비	571	41	123	407
시군구비	2,194	167	492	1,535
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2014. 12월 : 건축공사 완료

○ 2015.  6월 : 전시시설공사 완료

○ 2015. 12월 : 곤충사육시설 준공

□ 향후계획

○ 2016. 3월 :  곤충생태학습관 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대의모의지구 지방상수도 확장공사

담당자

환경수도과 김윤구(☎570-2584)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소규모수도시설의 수원 부족, 수질불량으로 인한 주민 불편해소

○ 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 주민 보건 및 생활환경개선

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013.01~ 2020.12

○ 위  치 : 의령군 대의면 행정마을 등 7개마을

○ 사업규모 : 상수도관로 14.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,100	100	200	150	3,650
국 비
시 도 비
시군구비	4,100	100	200	150	3,650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013. 2월 : 모의지구 지방상수도급수구역확장공사 용역 착수

○ 2013. 8월 : 모의지구 지방상수도급수구역확장공사 용역 완료

○ 2014. 1. 3. : 주민설명회 개최(대의면사무소)

○ 2014.11월~2015.1월 : 대의 하촌~암하 배수본관 매설 완료

중촌,암하마을 배수지선 및 급수관공사 완료

○ 2015. 4.17. : 모의지구 상수도공급에 대한 간담회 개최

□ 향후계획

○ 2015.9월 : 대의 행정마을 배수지선 및 급수관공사 시행예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

부림신반 하수관로 정비사업

담당자

환경수도과 신윤진(☎570-2593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 하수관 정비로 불명수 유입 차단 및 부림하수처리시설 효율 제고

○ 하천 수질 오염을 초기 단계부터 방지하여 공공수역의 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 12. ~ 2017. 03.

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 일원

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=12.9km, 오수맨홀비 정비 198개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,409백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,409	714	2,201	1,494	-
국 비	3,119	500	1,573	1,046	-
시 도 비
시군구비	543	86	278	179	-
지 방 채
민간자본
기 타	747	128	350	269	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ ‘14. 12월 : 사업 착공(총괄분, 1차분)

○ ‘14. 12월 ~ ’15. 6월 : 1차분 착공 및 준공 (오수관로 L=0.7km)

○ ‘15. 3월 ~16. 3월 : 2차분 착공 및 준공 (오수관로 L=2.6km)

□ 향후계획

○ ‘16. 3월 : 3차분 착공(오수관로 L=8.5km)

○ ‘17. 3월 : 3차분 준공 예정

사업명

동부권 지방상수도설치사업

담당자

환경수도과 임재영(☎570-2582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존소규모수도시설의 수원부족,수질불량 및 시설노후로 인한 주민불편해소

○ 낙동강 강변여과수를 이용한 양질의 수돗물을 안정적 공급

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013.1~ 2018. 3.

○ 위  치 : 의령군 낙서면등 5개면일원

○ 사업규모 : 배수지 300톤, 송수관로(D200~150mm) L=12.1km

배수관로(D200~80mm) L=42.4km,급수관로(26개마을) L=48.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  17,131백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	17,131	1,829	2,000	3,572	9,730
국 비	11,991	1,130	1,400	2,500	6,961
시 도 비
시군구비	5,140	699	600	1,072	2,769
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2013. 3월 : 기본 및 실시설계용역 착수(2014.11월 완료)

○ 2014. 3월 : 군계획시설(수도공급설비)결정 신청

○ 2014. 8월 : 경상남도 지방건설기술심의

○ 2015. 2월 : 공사계약심의 완료

○ 2015. 3월 : 공사(1차분) 착수(완료 2016.6월)

○ 2016. 2월 : 공사(2차분) 착수(완료 2016.12월)

□ 향후계획

○ 2017.10월~12월 : 종합시운전 가동 및 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

강변여과수 개발사업

담당자

환경수도과 임재영(☎570-2582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강변여과수 개발을 통한 의령 동부권 지역에 맑고 깨끗한 수돗물 공급

○ 기존 소규모수도시설을 이용한 지역에 대한 지방 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010.6~2017.12

○ 위  치 : 의령군 낙서면 여의리일원

○ 사업규모 : 강변여과수 3,300톤/일, 정수장 3,000톤/일, 관로 24km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,000	9,713	5,600	5,000	4,687
국 비	17,500	4,960	4,000	4,000	4,540
시 도 비
시군구비	7,500	4,753	1,600	1,000	147
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2012.5월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2012.11월~12월 : 실시계획인가 및 수도사업인가 완료, 공사계약심의완료

○ 2013.4월 : 사업 착수(1차분)

○ 2013. 4월 : 공사(1차분) 착수(완료 2014.8월)

○ 2014. 3월 : 공사(2차분) 착수(완료 2015.5월)

○ 2015. 3월 : 공사(3차분) 착수(완료 2016.5월)

○ 2016. 1월 : 공사(4차분) 착수(완료 2016.12월)

□ 향후계획

○ 2017.10월~12월 : 종합시운전 가동 및 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대의면농어촌생활용수개발사업

담당자

환경수도과 임재영(☎570-2582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소규모수도시설의 수원 부족, 수질불량으로 인한 주민 불편해소

○ 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 주민 보건 및 생활환경개선

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012.12~ 2016.8

○ 위  치 : 의령군 대의면 천곡리 등 4개리

○ 사업규모 : 정수장 500톤/일, 관로 17.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	3,691	1,309
국 비	3,500	2,584	916
시 도 비
시군구비	1,500	1,107	393
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2009. 6월 ~ 2011.12월 : 기본및실시설계용역완료, 편입토지 보상

○ 2012. 6월 : 수도사업인가, 군계획시설(수도공급설비)결정

○ 2012.10월 : 실시계획인가 완료

○ 2012.12월 : 공사(1차분) 착수(완료 2014.3월)

○ 2013. 3월 : 공사(2차분) 착수(완료 2014.7월)

○ 2014. 3월 : 공사(3차분) 착수(완료예정 2015.6월)

○ 2015. 6월 : 공사(4차분) 착수(완료예정 2016.8월)

□ 향후계획

○ 2016.8월 : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

궁류마을하수도시설설치공사

담당자

환경수도과 신윤진(570-2593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역 하수도시설 설치로 생활환경을 개선

○ 하천 수질 오염을 초기 단계부터 방지하여 공공수역의 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 12. 05. ~ 2016. 03. 14.

○ 위 치 : 의령군 궁류면 일원

○ 규 모 : 하수처리시설 1식(170㎥/일), 하수관로(L=13.0km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,759백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,759	4,138	2,621
국 비	4,731	2,897	1,834
시 도 비	405	248	157
시군구비	408	249	159
지 방 채
민간자본
기 타(기금)	1,215	744	471

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘12. 12월 : 사업 착공(총괄분, 1차분)

○ ‘13. 3월 ~ ’14. 5월 : 2차분 착공 및 준공 (오수관로 L=5.3km)

○ ‘14. 3월 ~ ’15. 3월 : 3차분 착공 및 준공 (오수관로 L=4.9km)

○ ‘14. 7월 : 1차분 준공 (하수처리장 1식 : 170㎥/일)

○ ‘15. 3월 : 4차분 착공

□ 향후계획

○ ‘16. 3월 : 4차분 준공 및 사업완료, 사용개시 공고

○ 궁류마을 하수처리구역내 배수설비 설치신고 수리, 하수도사용료 부과

사업명

한우산 생태숲 조성사업

담당자

산림녹지과 김태운

(☎570-2682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자생식물 보존‧증식을 통한 산림 휴양, 교육 숲 조성으로 경제 활성화

및 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ～ 2016년(7년간)

○ 위 치 : 궁류면 벽계리 산200번지 일원(한우산)

○ 규 모 : 100ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	2,200	2,000	800	-
국 비	2,500	1,100	1,000	400	-
시 도 비	750	330	300	120	-
군 비	1,750	770	700	380	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2009. 9. : 기본 및 실시설계

○ 2010. 1. ∼ 2011. 12. : 고사리숲길, 자생수목원, 억새원

○ 2012. 1. ∼ 2013. 3. : 소나무·생태통로 숲길, 야생화원

○ 2013. 4. ∼ 2014. 6. : 다지송원, 진달래원, 전기인입공사

○ 2015. 6. ∼ 2016. 6. : 홍보관, 숨길, 홍의송원, 특화식물원, 태양광발전 등

□ 향후계획

○ 방범용 CCTV 설치 : 2016. 7. ∼ 2016. 9.

○ 안내판 정비 : 2016. 7. ∼ 2016. 10. (종합안내판, 이정표 등)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

당 초	변 경	사 유	비고
2009 ~ 2015년	2009 ~ 2016년	지특사업비 확보 지연, 생태숲 설계 변경

사업명

자굴산권역 산림생태문화체험단지

조성사업

담당자

산림녹지과 박진수

(☎570-2683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다원적 기능의 복합휴양단지 조성으로 다양한 산림휴양 욕구에 적극

대처하고 지역경제 활성화 및 소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ～ 2018년(7년간)

○ 위 치 : 가례면 갑을리 산137번지 일원(자굴산)

○ 규 모 : 228ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30,000	4,100	4,000	4,000	17,900
국 비	15,000	2,050	2,000	2,000	8,950
시 도 비	4,500	615	600	600	2,685
군 비	10,500	1,435	1,400	1,400	6,265

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2015. 4. : 환경영향평가, 자연휴양림림 조성계획 승인

○ 2015. 4. ~ 현재 : 진입로 조성공사 시행중

○ 2015. 10. ~ 현재 : 건설사업관리 용역 시행중

○ 2015. 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2016. 5. : 본공사(1차분), 전기·통신 등 공사 시행중

□ 향후계획

○ 운영 컨설팅 발주 : 2016. 11. ∼ 2017. 12.

○ 2차 사업발주 : 2017. 02. ∼ 2018. 02.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

당 초	변 경	사 유	비고
2012 ~ 2016년	2012 ~ 2018년	지특사업비 확보 및 환경영향평가 협의지연

사업명

부림도시계획도로

(중로2-54호선)개설사업

담당자

건설도시과 이승봉(☎570-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 해소로 주민 불편 해소 및 군민 재산권 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 서동2구일원

○ 규 모 : 도로개설 L=154m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,000		1,000	-	-
국 비
시 도 비	500		500	-	-
시군구비	500		500	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 4월 : 실시설계 완료

○ 2015. 6월 : 감정평가 및 보상협의

○ 2015.10월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 9월 : 미협의 토지 수용재결 추진

○ 2016.12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	사업비(백만원)	사업기간	비고
당초	2,500	2014~2015
변경	1,000	2015~2016

사업명

부림 도시계획도로

(부림약국~하나로마트) 개설사업

담당자

건설도시과 이승봉(☎570-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부림 신반 도시계획도로(소로2-114호선) 미개설로 주거밀집지역 및 부림

시장을 이용하는 주민 통행불편 초래

○ 조속한 도로 개설로 주민불편 해소 및 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=160m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,380	34	1,374	972
국 비
시 도 비	1,190	17	687	486
시군구비	1,190	17	687	486
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2014. 02. : 실시설계 용역 완료

○ 2015. 07. : 편입 토지 및 지장물 보상협의

○ 2015. 09. : 지장물철거공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 (당초 : 2012~2013, 변경 : 2014~2016)

사업명

동동 도시계획도로

(혜성사우나~세월정) 개설사업

담당자

건설도시과 이승봉(☎570-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동동 도시계획도로(소로2-17호선) 미개설로 주거 밀집지역 내 차량 및

주민통행 불편

○ 소로2-17호선 잔여구간개설로 쾌적한 교통환경 조성 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 의령읍 동동리 지내

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=100m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,600	2,410	190
국 비
시 도 비	1,300	1,205	95
시군구비	1,300	1,205	95
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 02. : 실시설계 용역 완료

○ 2013. 09. : 편입 토지 및 지장물 보상협의

○ 2013. 09. : 공사 착공

○ 2015. 06. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경(당초 : 2013, 변경 : 2013~2015)

사업명

신반지구 상습침수도로 개선사업

담당자

건설도시과 김삼수(☎570-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의령군 동부권의 중심 소재지인 부림면 신반리를 진입하는 도로이나 도로 폭이 협소하고 강우에 따른 잦은 침수가 발생하는 도로임. 정비를 통하여 지역주민의 생명과 재산보호를 위하여 도로확포장사업 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 6월 ~ 2017년 12월

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 지내

○ 규 모 : 도로 확포장  L=150m,  가옥철거 18동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,600		2,000	-	600
국 비
시 도 비	1,000		1,000	-
시군구비	1,600		1,000	-	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2015. 4 : 도비보조금 지원확정 및 실시설계, 각종 협의이행

○ 2015. 8 : 편입토지 보상협의

○ 2016. 6 : 편입 가옥 13가구 보상 협의 완료

□ 향후계획

○ 2016.  7 : 편입가옥 재감정 및 재 보상협의

○ 2016. 12 : 보상완료 및 가옥 철거 완료

○ 2017.  3 : 공사시행

○ 2017. 12 : 공사완료 및 도로 사용개시

사업명

와요~운곡간 도로 확포장공사

담당자

건설도시과 김삼수(☎570-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의령군 용덕면을 연결하는 주요도로이며, 2002년 부분 개설이후 현재까지 개설되지 않은 구간 정비로 지역을 연결하는 도로망 확충으로 인근 농경지 주민의 영농불편 해소를 위하여 도로확포장사업 시행 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 6월 ~ 2018년 6월

○ 위 치 : 의령군 용덕면 와요리 ~ 운곡리 지내(용덕201호선)

○ 규 모 : 도로확포장  L=1,180m,  B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		700	600	1,700
국 비	700		700
시 도 비
시군구비	2,300			600	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2015. 2 : 실시설계 용역 시행

○ 2015. 5 : 실시설계 완료 및 각종 협의이행

○ 2015. 7 : 공사착공 및 편입토지 보상협의

○ 2016. 2 : 1차분 준공 및 2차분 시행

□ 향후계획

○ 2016. 7 : 2차분 준공 및 3차분 시행

○ 2018. 6 : 사업완료 및 도로 사용개시

사업명

다안1지구 급경사지 붕괴위험

지역 정비사업

담당자

안전관리과 김대윤(☎570-2762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태풍 및 우수기 시 풍수해를 예방하여 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 3 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 의령군 지정면 백야리 일원

○ 규 모 : 사면정비 L=320m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,600	4,600	3,000
국 비	3,800	2,300	1,500
시 도 비	1,400	950	450
시군구비	2,400	1,350	1,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 3 ~ 2013. 12 : 1,2차분 사업 완료

○ 2014. 1 ~ 2014. 12 : 3차분 사업 완료

○ 2015. 1 ~ 2015.  7 : 4차분 사업 완료 및 전체사업 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

괴진2지구 급경사지 붕괴위험

지역 정비사업

담당자

안전관리과 김대윤(☎570-2762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태풍 및 우수기 시 풍수해를 예방하여 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 의령군 가례면 괴진리 일원

○ 규 모 : 사면정비 L=195m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,000	400	3,600
국 비	2,000	200	1,800
시 도 비	600	60	540
시군구비	1,400	140	1,260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 1 ~ 2014. 3  : 실시설계 완료

○ 2014. 5 ~ 2014. 12 : 1차분 사업 완료

○ 2015. 1 ~ 2015. 11 : 2차분 사업 완료 및 전체사업 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

경산소하천 정비사업

담당자

안전관리과 조상언(☎570-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적

하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2016. 08.

○ 위 치 : 의령군 부림면 경산리 일원

○ 규 모 : 호안정비 L=1,290m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,451백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,451	1,945	506	-	-
국 비	1,225	972	253	-
시 도 비
시군구비	1,226	973	253	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2013.  3월 : 사업 시행

□ 향후계획

○ 2016. 08월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

방계소하천 정비사업

담당자

안전관리과 조상언(☎570-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적

하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2016. 7.

○ 위 치 : 의령군 낙서면 전화리 일원

○ 규 모 : 호안정비 L=1,185m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,650백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,650	2,390	1,260	-	-
국 비	1,825	1,195	630	-
시 도 비	-
시군구비	1,825	1,195	630	-	-
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2013.  3월 : 사업 시행

□ 향후계획

○ 2016.  7월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

적곡들소하천 정비사업

담당자

안전관리과 조상언(☎570-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적

하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 의령군 정곡면 적곡리 일원

○ 규 모 : 호안정비 L=933m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,012백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,012	1,994	1,018	-	-
국 비	1,506	997	509	-
시 도 비	-
시군구비	1,506	997	509	-	-
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2013.  3월 : 사업 시행

□ 향후계획

○ 2015. 12월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

보천 소하천 정비공사

담당자

안전관리과 조상언(☎570-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적

하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 6. ~ 2016. 8.

○ 위 치 : 의령군 화정면 상일리 일원

○ 규 모 : 호안정비 L=1,140m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,174백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,174	700	1,140	334	-
국 비	1,087	350	570	167
시 도 비	-
시군구비	1,087	350	570	167	-
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2014.  2월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2014.  6월 : 사업 시행

□ 향후계획

○ 2016.  8월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

내곡소하천 정비사업

담당자

안전관리과 조상언(☎570-2773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적

하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 의령군 정곡면 석곡리 일원

○ 규 모 : 호안정비 L=1,382m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,186백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,186	-	200	1,000	986
국 비	1,093	-	100	500	493
시 도 비
시군구비	1,093	-	100	500	493
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015.  6월 : 기본 및 실시설계완료

○ 2015. 12월 : 사업 시행

□ 향후계획

○ 2017.  12월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

의령 동동지구 택지개발사업

담당자

신시가지조성사업단

이지혜(☎570-2922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구의 지속적인 감소에 따른 군세 약화방지를 위한 지역개발 기반구축으로

계획도시로 개발

○ 지역주민들에게 쾌적한 주거환경 제공과 인근 대도시의 배후도시로서의

기능 및 주변지역의 산업단지조성 등에 대한 주거공간지역으로서의 역할

□ 사업개요

○ 기 간 :  2009년 ~ 2018년

○ 위 치 : 의령군 의령읍 동동리 500번지 일원

○ 규 모 : A=248,750㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	49,500	32,100	6,820	8,275	2,305
국 비
시 도 비	10,000	10,000
시군구비	39,500	22,100	6,820	8,275	2,305
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 토지보상 및 실시설계 : 2011 ~ 2014

○ 문화재발굴조사 : 2014. 04 ~ 2015. 02

○ 사업발주 : 2015. 06 (1단계)

□ 향후계획

○ 사업준공(1단계) : 2017. 9

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

시설원예 에너지이용효율화사업

담당자

농업정책과 윤상현(☎570-2622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 이용기술의 농업시설 적용 및 확대보급 기반 구축

○ 국제유가 및 농자재 가격 상승으로 인한 농가의 경영비 부담 경감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5∼2015. 12. 29

○ 위 치 : 경남 의령군 용덕면 소상리 127-1∼5

○ 규 모 : 15,216㎡(지열냉난방시설 - 수직밀폐형 1,529kw)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,504.3백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,504		2,504
국 비	1,502		1,502
시 도 비	150		150
시군구비	351		351
지 방 채
민간자본	501		501
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 5. 19 : 대상자 변경(도 승인)

○ 2015. 5. 26 : 보조금 교부결정 통지

○ 2015. 6.  5 : 의령군⇔농어촌공사 의령지사 위(수)탁 협약 체결

○ 2015. 6. 5∼12.29 : 사업추진 및 정산

□ 향후계획

○ 시설원예 에너지이용효율화사업 지속적인 확대 보급

○ 신재생에너지 보급으로 경영비 절감을 통한 농가 소득안정 도모

□ 사업변경 내역

○ 대 상 자 : 당초(이승만) → 변경(정태경)

○ 사업규모 : 당초(14,870㎡) →변경(15,216㎡)

9-2. 지방채 발행사업

우리 의령군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

9-3. 민간투자사업

우리 의령군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	의령군립 노인전문병원	백년건강 지킴이(주)	15,762	2,226	653	12,883	2011년~2031년 (20년)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

의령군립 노인전문병원

담당자

보건소 서영수(☎570-4016)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초고령화 사회진입에 따른 노인성질환 치매,  중풍등의 치료 및 재활

○ 노인성 질환자 및 가족의 사회,경제적 부담경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 4. 9. ~ 2011. 6. 29.

○ 위    치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655

○ 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)

○ 총사업비 : 15,762백만원

○ 사업규모 : 1동 2층 (건축면적 : 1,531.22㎡ / 연면적 : 2,879.62㎡)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영관리기간 : 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,762	2,226	653	653	12,230
국 비	4,776	672	200	200	3,704
시 도 비	2,338	286	100	100	1,852
시군구비	8,648	1,268	353	353	6,674
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중)

○ 2011. 10. 1 ~ 현재

□ 향후계획

○ 의령군립 노인전문병원 시설임대료 및 운영비 적기 지급

□ 사업변경 내역

○ 병상수 증가 : (당초) 23실 95병상 => (변경) 26실 128병상