109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 의령군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
계	70,300	40,826	11,392	18,082
의령 화정복합문화센터건립사업	2,350	20	267	2,063	2018	2017	15
조사료 생산기반 확충사업	3,000	0	0	3,000	2017	2015	30
의령 거장산 가족휴양시설 기반시설 정비	2,400	-	70	2,330	2018	2016	10
신반지구 상습침수도로 개선사업	2,600	2,000	-	600	2017	2015	30
와요~운곡간 도로 확포장공사	3,000	700	600	1,700	2018	2015	80
정동교 확장공사	3,500	-	2,000	1,500	2018	2015	20
의령 동동지구 택지개발사업	49,500	38,106	8,255	3,139	2017	2014	95
행복학습관 건립	3,950	0	200	3750	2018	2016	10

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

의령 화정복합문화센터 건립사업

담당자

의병문화관광과

이명식(☎570-2433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들에 대한 삶의 질을 향상시키고 지역사회 문화예술 향유 기회       증대와 지역의 주차문제 해소 및 편익시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 화정면 상정리 737-1 등 6필지

○ 규 모 : 복합문화센터 1개소(지상2층, 부지 : 6,695㎡, 건축 : 800㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,350	20	267	2,063
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	1,350	20	267	1,063
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 지특회계 인센티브사업 확정(국비 2억원 확보)

○ 매입부지 보상완료

○ 실시설계용역 시행 : 2016년 12월

○ 건립부지 매장문화재 표본문화재 표본조사 용역 완료 : 2017년 5월

○ 장애물없는 생활환경(B.F) 예비인증 용역 시행 : 2017년 7월

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료 : 2017년 10월

○ 실시계획인가 신청 및 승인, 공사 발주

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

조사료 생산기반 확충사업

담당자

농축산유통과

최승룡(☎570-4142)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬유질 배합사료 중심 사양관리 개선으로 토요애한우 브랜드 고급화 및        생산비 절감 등 안정적인 사육기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017

○ 위 치 : 용덕면 교암리 313-1 외 9필지

○ 규 모 : TMF 사료제조 공장 (1일 60톤 생산)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017	2018년 이후
계	3,000			3,000
국 비	900			900
시 도 비	270			270
시군구비	630			630
지 방 채
민간자본	1,200			1,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공장신설 승인, 건축허가 (2017. 6. 14)

○ 사업착공 신고 (2017. 6. 27)

□ 향후계획

○ 기계설비 입찰 및 계약 (2017. 7월)

○ 사업 완공 및 시험가동 (2017. 11월)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2015. 8 ∼2016. 12, 현재 : 2016.  1 ∼ 2017. 12

- 사유 : 군비확보 지연 및 내진설계 추가 등으로 명시이월

사업명

의령 거장산 가족휴양시설

기반시설 정비

담당자

건설도시과

정재호(☎570-212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가족휴양시설 진입도로 확․포장 및 노후 위험교량 재가설로 관광지 이용객 통행 불편 해소 및 관광기반시설 정비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 의령군 궁류면 압곡리

○ 규 모 : 진입도로 정비 L=186.4m, 교량 재가설 L=65.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017	2018년 이후
계	2,400	0	70	2,100	230
국 비
시 도 비	1,200	0	35	1,100	65
시군구비	1,200	0	35	1,000	165
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017.  4. : 실시설계 완료

○ 2017.  6. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  6. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신반지구 상습침수도로 개선사업

담당자

건설도시과

정주영(☎570-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사고위험성이 높은 곳(침수도로)에 대한 정비로 원활한 교통흐름 및

안정된 도로망을 구축하고 주변지역 생활환경 개선 및 균형개발 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 지내

○ 규 모 : 도로확포장 L=162m, 가옥철거 18동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,600	2,000	0	600	0
국 비
시 도 비	2,000	2,000	0	0	0
시군구비	600	0	0	600	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015.  3. : 실시설계 완료

○ 2016. 11. : 침수도로 개선사업 착공

○ 2017.  6. : 보상 및 철거 17동 완료(95%)

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

와요~운곡간 도로 확포장공사

담당자

건설도시과

정재호(☎570-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미개통 구간 개설공사로서 원활한 교통흐름 및 안정된 도로망을 구축하고 주변지역의 생활환경 및 산업기반을 정비하여 균형있는 개발을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 의령군 용덕면 운곡리, 와요리 지내

○ 규 모 : 도로확포장 L=1,180m B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017	2018년 이후
계	3,000	700	600	1,000	700
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	700	600	1,000	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015.  6. : 총괄 및 1차분 계약 및 착공

○ 2017.  6. : 4차분 준공

□ 향후계획

○ 2017.  7. : 5차분 착공

○ 2018.  6. : 최종 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

정동교 확장공사

담당자

건설도시과

정재호(☎570-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사고위험성이 높은 도로(교량) 정비공사로서 원활한 교통흐름 및 안정된

도로망을 구축하고 주변지역 생활환경 개선 및 균형있는 개발 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 의령군 궁류면 벽계리 지내

○ 규 모 : 교량 신설 L=156m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017	2018년 이후
계	3,500	0	2,000	1,000	500
국 비
시 도 비	1,000	0	1,000	0	0
시군구비	2,500	0	1,000	1,000	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 12. : 실시설계 용역 완료

○ 2016. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

의령 동동지구 택지개발사업

담당자

도시개발사업과

김철하(☎570-2922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구의 지속적인 감소에 따른 군세 약화방지를 위한 지역개발 기반구축으로

계획도시로 개발

○ 지역주민들에게 쾌적한 주거환경 제공과 인근 대도시의 배후도시로서의

기능 및 주변지역의 산업단지조성 등에 대한 주거공간지역으로서의 역할

□ 사업개요

○ 기 간 :  2009년 ~ 2017년

○ 위 치 : 의령군 의령읍 동동리, 무전리 일원

○ 규 모 : 택지개발 A=259,772㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	49,500	38,106	8,255	3,139
국 비
시 도 비	10,000	10,000
시군구비	39,500	28,106	8,255	3,139
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2013.10. : 지구지정 변경, 개발계획 변경 및 실시계획 승인

○ 2015.06. : 의령 동동지구 택지개발사업(1단계) 착공

○ 2017.06. : 의령 동동지구 택지개발사업(1단계) 토목, 전기공사 준공

□ 향후계획

○ 2017.10. : 의령 동동지구 택지개발사업(1단계) 조경공사 준공

○ 2017.12. : 의령 동동지구 택지개발사업(1단계) 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

행복학습관 건립

담당자

행정과

조윤구(☎570-2132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육여건 개선을 통한 학생가족의 향토정착 및 지역인재 육성

○ 자녀교육으로 인한 대도시 인구유출 방지로 자치단체 존립 확충

○ 지식산업 시대의 경쟁력 강화를 위한 인적자원 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 07. ~ 2018. 03.

○ 위 치 : 의령군 의령읍 의령동동 택지개발지구 내 5BL

○ 규 모 : 학습관 2동(3층), 연면적 2,820.63㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017	2018년 이후
계	3,950		93	3,907	1,500
국 비	400			400
시 도 비	1,000			1,000
시군구비	2,550		93	2,507	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 도면 및 내역검토, 현장사무소 설치 준비, 가설전기‧가설용수 등 준비

□ 향후계획

○ 2018년 3월 중공 예정

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 2,000㎡, 1동/3층	연면적 2,820.63㎡, 2동/3층
총사업비	3,950백만원	5,500백만원

10-2. 지방채 발행사업

우리 의령군에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해	당	없	음

10-3. 민간투자사업

우리 의령군에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	의령군립 노인 전문병원	백년건강 지킴이(주)	3,960	2,879	619	12,264	2011년~2031년 (20년)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

의령군립 노인전문병원

담당자

보건소 서영수(☎570-4016)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초고령화 사회진입에 따른 노인성질환 치매,  중풍등의 치료 및 재활

○ 노인성 질환자 및 가족의 사회,경제적 부담경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 4. 9. ~ 2011. 6. 29.

○ 위    치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655

○ 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)

○ 총사업비 : 3,960백만원

○ 사업규모 : 1동 2층 (건축면적 : 1,531.22㎡ / 연면적 : 2,879.62㎡)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영관리기간 : 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,762	2,226	653	653	12,230
국 비	4,776	672	200	200	3,704
시 도 비	2,338	286	100	100	1,852
시군구비	8,648	1,268	353	353	6,674
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중)

○ 2011. 10. 1 ~ 현재

□ 향후계획

○ 의령군립 노인전문병원 시설임대료 및 운영비 적기 지급

□ 사업변경 내역

○ 병상수 증가 : (당초) 23실 95병상 => (변경) 26실 128병상